1.2.3.	Mansionario opere strutturali
	Mansionario 
OPERE STRUTTURALI		Note/esempi	
				
1	Progetto Fattibilità		 	
	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente 	*	Particolari richieste sulla tipologia delle strutture c.a. carpenteria metallica..	
	Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto 	*	Localizzazione dell'area su cui realizzare l'edifico per la definizione di grado di sismicità, tipologia del suoli	
	Confronto con altri tecnici specialisti	*	Verifiche di fattibilità geologica per la definizione dell'impianto fondale, di particolari esigenze dal punto di vista impiantistico	
	Prime proposte di progetto 	*	Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni per l'interazione delle strutture con il progetto architettonico	
	Confronti con il committente per messa a punto e scelta soluzione	*	Colloqui vari con committente per analisi soluzione/i preparate e definizione 	
	Espandibilità	*	Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli...	
	Stima sintetica dei costi di costruzione	*	Stima parametrica a mq/mc	
*	Eventuali altre prestazioni  e documentazioni particolari		 	
	 		 	
	 		 	
	Varianti al progetto	*	Aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione prodotta	
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	*	 	
	Maggiorazioni per urgenza	*	 	
				
2	Progetto Preliminare		 	
	Relazione illustrativa	*	 	
	Relazione tecnica edifici nuovi	*	 	
	Relazione tecnica edifici esistenti	*	 	
	Elaborati progetto preliminare	*	 	
	Sezioni geotecniche	*	 	
	Calcolo sommario della spesa	*	 	
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	*	 	
	Relazione indagine geotecnica	*	Redatta da professionista abilitato	
	Relazione indagine idrologica	*	Redatta da professionista abilitato	
	Relazione indagine sismica	*	Redatta da professionista abilitato	
*	Eventuali altre prestazioni  e documentazioni particolari		 	
	 		 	
	 		 	
	Varianti al progetto	*	Aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione prodotta	
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	*	 	
	Maggiorazioni per urgenza	*	 	
				
3	Progetto definitivo delle strutture		 	
	Relazione generale	*	Normativa di riferimento, criteri per le scelte progettuali, valutazione delle prestazioni e dei costi di esercizio per il piano di manutenzione delle strutture	
	Relazione strutture	*	Valutazione delle caratteristiche del terreno per individuazione di dimensioni e tipologia degli elementi strutturali al fine della redazione del computo metrico estimativo	
	Relazione geotecnica	*	 	
	Soluzioni ulteriori di questioni specialistiche	*	 	
	Rielaborazione del rilevo topografico con individuazione delle tipologie di sottosuolo riportate nella relazione geologica	*	Sezioni necessarie per la localizzazione dell'impianto fondale rispetto alle stratigrafie del sottosuolo	
	Piante, sezioni di progetto (carpenterie di piano, impianto fondale) e nel caso di ristrutturazioni tavole di confronto	*	scale 1:100 o 1:50. Verifica geotecnica per esatta definizione dell'impianto fondale e dei parametri caratteristici del terreno	
	Calcoli strutture	*	 	
	Disciplinare descrittivo e prestazionale	*	 	
	Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo	*	definito sulla base delle dimensioni degli elementi strutturali definiti nella relazione preliminare di calcolo	
	Analisi dei prezzi unitari	*	definito sulla base delle dimensioni degli elementi strutturali definiti nella relazione preliminare di calcolo	
	Relazione indagine geotecnica	*	 	
	Relazione indagine idrologica	*	 	
	Relazione indagine sismica	*	 	
*	Consegna del progetto		 	
	Confronto con altri tecnici specialisti	*	fornire le tavole in formato cad per la sovrapposizione degli elaborati strutturali con gli elaborati architettonici ed impiantistici	
*	Eventuali altre prestazioni  e documentazioni particolari		 	
	 		 	
	 		 	
	 		 	
	Varianti al progetto	*	Aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione prodotta	
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	*	 	
	Maggiorazioni per urgenza	*	 	
				
4	Progetto Esecutivo		 	
	Relazione strutture	*	Descrizione generale dell'opera con caratteristiche della costruzione e la sua localizzazione. Normativa di riferimento. Qualità e caratteristiche meccaniche dei materiali scelti per la realizzazione, criteri di calcolo adottati, carichi e sovraccarichi considerati	
	Relazione geotecnica	*	 	
	Tavola tracciamento edificio	*	 	
	Carpenterie, profili e sezioni	*	Dovranno contenere le definizioni dei materiali da costruzione e  consentire una inequivocabile definizione delle opere strutturali da realizzare, le quote per il posizionamento altimetrico rispetto al piano campagna... 	
	Particolari costruttivi delle strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso	*	Disegni in scala idonea che consentano la definizione esatta delle dimensioni di tutti gli elementi strutturali comprensivi della posizione delle barre di armatura, dei tracciati delle armature di presollecitazione, copriferro ecc. 	
	Particolari costruttivi delle strutture metalliche e lignee	*	Disegni in scala idonea che consentano la definizione esatta delle dimensioni di tutti i profili ed i particolari dei collegamenti	
	Particolari costruttivi delle strutture in muratura	*	Disegni in scala idonea che consentano la definizione esatta degli elementi tipologici e dimensionali con definizione degli elementi da utilizzare	
	Calcoli esecutivi strutture	*	redatta secondo la normativa in vigore con indicazione dei carichi , dello schema statico strutturale adottato	
	Particolari esecutivi opere integrative	*	 	
	Piano di manutenzione	*	 	
	Assistenza alla redazione del Cronoprogramma	*	 	
	Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo	*	 	
	Analisi dei prezzi unitari	*	 	
	Capitolato speciale di appalto	*	Contenente tutte le indicazioni relative alle opere non riportabili sugli elaborati grafici
	
*	Consegna del progetto		 	
	Confronto con altri tecnici specialisti	*	fornire le tavole in formato cad per la sovrapposizione degli elaborati strutturali con gli elaborati architettonici ed impiantistici	
*	Eventuali altre prestazioni  e documentazioni particolari		 	
	 		 	
	 		 	
	Varianti al progetto	*	 	
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	*	 	
	Maggiorazioni per urgenza	*	 	
				
5	Direzione lavori		 	
	Inizio lavori		 	
	Analisi del progetto delle strutture e relazione di segnalazione di eventuali errori	*	 	
	assistenza al deposito denuncia strutture	*	 	
*	Coordinamento operatori coinvolti nella costruzione		Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione	
	aggiornamento cronoprogramma	*	 	
	aggiornamento manuali d'uso e manutenzione	*	 	
	coordinamento ditte appaltatrici	*	 	
	coordinamento tecnici specialisti	*	 	
*	Tracciamenti	*	Prestazioni specialistiche: topografo	
*	Direzione lavori opere strutturali - Vigilanza dei lavori		Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti	
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	*	 	
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro	*	 	
	Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali 	*	 	
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	*	 	
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax	*	 	
	Comunicazione di fine lavori al Comune ed al collaudatore	*	 	
	Asseverazioni di conformità opere strutturali	*	 	
	Assistenza giornaliera	*	 	
	Misura e contabilità dei lavori	*	 	
	Prove di officina	*	 	
	Assistenza al collaudo	*	Comprensiva di aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori e compartecipazione ai sopralluoghi in cantiere effettuati dal collaudatore in corso d'opera	
	Liquidazione	*	 	
*	Eventuali altre prestazioni  e documentazioni particolari		 	
	 		 	
	 		 	
	Varianti al progetto	*	Aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione prodotta	
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	*	 	
	Maggiorazioni per urgenza	*	 	
				
6	Collaudo statico delle opere		 	
	Collaudo in corso d'opera	*	 	
	Verifica dei materiali posti in opera	*	Prove sui campioni prelevati in laboratori autorizzati	
	Prove di carico	*	Di tipo non distruttivo da eseguire sulle strutture realizzate	
	Sopralluoghi a cadenza variabile	*	Verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni	
	Verifica a campione dei calcoli	*	 	
	Revisione dei calcoli	*	 	
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	*	 	
	Stesura del certificato di collaudo statico	*	 	
*	Eventuali altre prestazioni  e documentazioni particolari		 	
	 		 	
	 		 	
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	*	 	
	Maggiorazioni per urgenza	*	 	

				
				
7	Validazione del progetto		 	
	Partecipazione alle riunioni per la validazione  del progetto redatto	*	Stesura di relazioni suppletive eventualmente richieste in fase di validazione	
	 		 	
	 		 	
	Maggiorazioni per edifici esistenti e/o per speciali difficoltà	*	 	
	Maggiorazioni per urgenza	*