1.2.4.	Mansionario opere strutturali di piccole dimensioni
	Mansionario
OPERE STRUTTURALI DI PICCOLE DIMENSIONI		Note/esempi	
1	Progetto di massima	 	 	
	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente /progettista architettonico	*	Particolari richieste sulla tipologia delle strutture c.a. carpenteria metallica..	
	Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto 	*	Localizzazione dell'area su cui realizzare l'edifico per la definizione di grado di sismicità, tipologia del suoli	
	Confronto con altri tecnici specialisti	*	Verifiche di fattibilità geologica per la definizione dell'impianto fondale, di particolari esigenze dal punto di vista impiantistico	
	Proposta di progetto 	*	Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni per l'interazione delle strutture con il progetto architettonico	
	Confronti con il committente/ progettista architettonico per messa a punto e scelta soluzione	*	 	
	Espandibilità	*	Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli...	
	Stima sintetica dei costi di costruzione	*	Stima parametrica a mq/mc	
*	Eventuali altre prestazioni  e documentazioni particolari		 	
	 		 	
	 		 	
2	Progetto definitivo-esecutivo		 	
	Verifica impostazione struttura con impiantisti/progettista architettonico ed individuazione forometrie necessarie	*	 	
	Progetto delle strutture in base alle N.T.C. 14-1-2008	*	Analisi sismica, calcoli strutturali, …	
	Redazione di elaborati grafici strutturali	*	Piante speculari, sezioni travi e disegno dei ferri, sezioni pilastri e setti (eventuale tabella delle armature), particolari costruttivi di tutte le strutture da realizzare, eventuali sezioni del fabbricato utili la cantierizzazione della struttura, piante per il tracciamento delle strutture, prescrizioni sui materiali da utilizzare, caratteristiche dei solai e portate, ...	
	Acquisizione e verifica di progetti specialistici relativi ad elementi strutturali progettati da altri professionisti 		pali, berlinesi, solai, coperture prefabbricate in legno, …	
	Relazione illustrativa	*	 	
	Relazione di calcolo strutturale	*	 	
	Relazione sulle fondazioni		 	
	Relazione tecnica per edifici esistenti		 	
	Dichiarazione del progettista in base all'art. 2 regolamento di cui alla L.R. n.46/1985	*	 	
	Piano di manutenzione delle strutture	*	 	
	Assistenza alla redazione del Cronoprogramma	*	 	
	Predisposizione denuncia a firma del costruttore/committente, predisposizione allegati e richiesta/raccolta documentazione da allegare redatta da altri professionisti	*	Predisposizione. Modello denuncia, nomina collaudatore, copie relazione geologica/geotecnica e dichiarazione del geologo, redazione 2 copie di tutti gli allegati	
	Raccolta delle firme e protocollo della denuncia (in alternativa consegna della documentazione predisposta al committente/progettista architettonico/D.L.	*	 	
	Riunione con D.L. strutture, costruttore, progettista architettonico, D.L. architettonico per illustrazione del progetto strutturale	*	Fornitura di n. 3 copie degli elaborati grafici e di copia in pdf su supporto informatico (per stampa di eventuali altre copie)	
	 		 	
				
3	Direzione lavori strutture		 	
	Inizio lavori		 	
	Analisi del progetto delle strutture e relazione di segnalazione di eventuali errori	*	 	
	assistenza al deposito denuncia strutture	*	 	
*	Coordinamento operatori coinvolti nella costruzione		Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione	
	aggiornamento cronoprogramma	*	 	
	aggiornamento manuali d'uso e manutenzione	*	 	
	coordinamento ditte appaltatrici	*	 	
	coordinamento tecnici specialisti	*	 	
*	Verifica tracciamenti delle strutture in collaborazione con la D.L.  Architettonica	*	 	
*	Direzione lavori opere strutturali - Vigilanza dei lavori		Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti	
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici (riunione con altre parti interessate)	*	 	
	Determinazione prelievi di provini/campioni di materiali da effettuare e delle prove da effettuare, determinazione delle modalità di conservazione	*	 	
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro	*	 	
	Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali 	*	 	
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	*	 	
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax	*	 	
	Comunicazione di fine lavori al Comune ed al collaudatore	*	 	
	Asseverazioni di conformità opere strutturali	*	 	
	Assistenza giornaliera	*	 	
	Assistenza la prelievo dei provini/campioni di materiali, verbale di prelievo	*	 	
	Aggiornamento collaudatore sullo stato d'avanzamento dei lavori   e coordinamento dei sopralluoghi del collaudatore in corso d'opera	*	 	
	Assistenza ai sopralluoghi del collaudatore in corso d'opera	*	 	
	Acquisizione e verifica di progetti specialistici/strutture prefabbricate/ … progettati da altri professionisti in corso d'opera		pali, berlinesi, solai, coperture in legno, parti strutturali in acciaio, …	
	Integrazione denuncia con  progetti specialistici/strutture prefabbricate/ … progettati da altri professionisti		 	
	Assistenza al collaudo finale	*	 	
	 	*	 	
				
4	Varianti al progetto esecutivo		 	
	Aggiornamento/integrazione progetto delle strutture	*	 	
	Aggiornamento/integrazione elaborati grafici strutturali	*	 	
	Aggiornamento relazione illustrativa (se variata)	*	 	
	Aggiornamento/ integrazione relazione di calcolo strutturale	*	 	
	Aggiornamento/integrazione Relazione sulle fondazioni (reg. L.r. 46/1985 art. 2)		 	
	Aggiornamento/ integrazione Relazione tecnica per edifici esistenti (L.r. 46/1985 art. 2)		 	
	Dichiarazione del progettista in base all'art. 2 regolamento di cui alla L.R. n.46/1985	*	 	
	Aggiornamento manuale di manutenzione delle strutture	*	 	
	Assistenza alla redazione del Cronoprogramma	*	 	
	Predisposizione documentazione per integrazione della denuncia	*	 	
	Raccolta delle firme e protocollo dell'integrazione  (in alternativa consegna della documentazione predisposta al committente/progettista architettonico/D.L.)	*	 	
	Riunione con D.L. strutture, costruttore, progettista architettonico, D.L. architettonico per illustrazione del progetto strutturale	*	Fornitura di n. 3 copie degli elaborati grafici e di copia in pdf su supporto informatico (per stampa di eventuali altre copie)	
	 		 	
5	Collaudo statico delle opere		 	
	Collaudo in corso d'opera	*	 	
	Sopralluoghi a cadenza variabile	*	Verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni	
	Verifica dei materiali posti in opera	*	Prove sui campioni prelevati in laboratori autorizzati	
	Prove di carico e prove sclerometriche	*	Di tipo non distruttivo da eseguire sulle strutture realizzate	
	Verifica a campione dei calcoli	*	 	
	Stesura del certificato di collaudo statico	*	 	
				
6	Prestazioni specialistiche		 	
	Relazione geologica e geotecnica 	*	Completa di dichiarazione di cui all'art. 2 regolamento regionale L.R. 46/1985	
	Progetto opere speciali	*	Pali, berlinesi, …	
	Progetto eventuali parti prefabbricate	*	solai, travi rep, parti in acciaio, parti in legno (coperture, …)	
	 		 	
				
7	Validazione del progetto		 	
	Partecipazione alle riunioni per la validazione  del progetto redatto	*	Stesura di relazioni suppletive eventualmente richieste in fase di validazione	
	 	