1.2.6.	Mansionario impianti elettrici e speciali
	Mansionario
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		Note/esempi	
1-
ELE	Definizione obiettivi dell'intervento 	 	 	
□	Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere.
Rif. Impianto elettrico e speciali	
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□	Definizione MACRO impianti:
 - impianto distribuzione luce e forza motrice
- impianto illuminazione
- impianto illuminazione di emergenza
 - impianto telefonico/rete dati
 - impianto videocitofonico/tvcc
 - impianto anti-intrusione
 - impianto rivelazione incendi
 - impianto antenna tv
- diffusione sonora
- fotovoltaico
- building automation
- ..........
- .......... 	
				
2-
ELE	Incontro/analisi con/del progetto edile	 	 	
□	Approfondimento impianti specialistici	*	Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile	
 	 		Acquisizione informazioni circa le utenze da servire (eventuale stesura dell'elenco dei carichi elettrici)
- Acquisizione informazioni circa il progetto degli impianti meccanici
- Classificazione degli ambienti secondo la normativa CEI (ambienti medici, ambienti a rischio di esplosione ecc.)
- Progetto Illuminotecnico	
	 		Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze ecc.	
□	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente 	

□

□

□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□	Per ogni MACRO impianto proposta o raccolta richiesta delle tipologie impiantistiche:
- schemi tipologici alimentazione (MT, BT Autoproduzione)
- impianto distribuzione luce e forza motrice con...
- impianto illuminazione - Progetto Illuminotecnico
- impianto illuminazione di emergenza
 - impianto telefonico/rete dati 
 - impianto videocitofonico/tvcc
 - impianto anti-intrusione
 - impianto rivelazione incendi
 - impianto antenna tv
- diffusione sonora
- fotovoltaico
- building automation
- .........
- .........	
				
3-
ELE	Progetto Preliminare		 	
□	Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto	*	Visita sul posto	
□	Verifiche c/o enti vari delle modalità di allaccio e potenze impegnate/richieste	*	Contattare società distribuzione energia elettrica.	
 	 		individuazione vincoli derivanti da enti: C.T., Vigili del Fuoco, serbatoi, gas dotti, zone di rispetto, ecc..	
□	Confronto con committente o altri tecnici specialistici	*	Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile e impianti meccanici	
 	 		Colloqui vari e messa a punto obiettivi/passaggi tecnici, forometrie, passaggi, vincoli da parte di altra impiantistica	
□	Progetto preliminare	*	Schemi a Blocchi preliminari con identificazione locali tecnici, passaggi condotti indicativi. Calcoli preliminari per identificazione Potenze - Coordinamento con Impiantista meccanico per calcoli preliminari di dimensionamento	
□	Redazione computo estimativo preliminare	*	Elenco costi per macro voci per singola tipologia impiantistica.	
□	Redazione relazione tecnica preliminare. 	*	Descrizione preliminare impianti 	
□	Copia su supporto informatico progetto preliminare	*	Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi.	
□	Copia cartacea progetto preliminare	*	Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi.	
□	Esposizione progetto a committente	*	Esposizione del progetto preliminare scelte progettuali e tipologie impiantistiche adottate	
				
4-
ELE	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione		(per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni 	
□	Progetto impianto  D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà	*	Acquisizione documentazioni da progettista architettonico su tipologie costruttive adottate e redazioni e relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate.	
□	Verifica e Calcolo Protezione scariche atmosferiche secondo CEI 81-10	*	Redazioni e relazione tecnica e produzione due copie cartacee firmate.	
□	Copie su supporto informatico	*	Copia su cd in formato informatico (PDF) delle relazioni o dichiarazioni	
□	 		 	
				
5-
ELE	Elaborazione progetto esecutivo		 	
□	Rilievo, visita cantiere 	*	verifica spazi, altezze, forometrie, ecc..	
□	 		 	
□	Colloqui con impiantista meccanico per eventuali richieste impiantistiche.	*	valutazione di scelte per tipologie impiantistiche al fine di ottenere le prestazioni richieste 	
□	Elettrici e Speciali: per ogni tipologia di intervento
(eventualmente si possono raggruppare più tipologie di interventi nei singoli elaborati)	
□
□
□
□
□
□
□

□

□
□
□
□
□	Progetti esecutivi con almeno:
- planimetrie
- sezioni coordinate
- schemi unifilari Quadri elettrici con ausiliari
- schemi a blocchi
- particolari e dettagli installativi
- tabella potenze elettriche ed alimentazioni
- calcoli di dimensionamento linee e coordinamento protezioni
- calcoli illuminotecnici se richiesto progetto illuminotecnico
- relazione illustrativa intervento
- capitolato tecnico e d'appalto
- computo metrico per richieste d'offerta
- computo metrico estimativo
- elenco degli elaborati consegnati	
□	Rapporti con Enti per definizione locali contatori, punti ingresso, cabine MT	
□
□	Riunioni con progettisti e definizione delle assistenze civili per forometrie e manufatti	

				
6-
ELE	Prestazioni relative all'appalto dei lavori impiantistici	 	 	
	Appalto opere da elettricista	 	 	
	Progetto esecutivo 	*	vedi sopra	
	Capitolato prestazionale e relazione illustrativa	*	 	
	Capitolato speciale d'appalto	*	 	
	Computo metrico	*	 	
	Cronoprogramma dei lavori	*	 	
	Bozza contratto d'appalto	*	 	
	Elenco prezzi unitari per categorie	*	 	
	Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico	*	 	
*	Assistenza all'appalto		 	
	Scelta ditte da interpellare: riunione con committente	*	Mediamente verranno interpellate 3 ditte 	
	Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi	*	 	
	Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute	*	 	
	Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili	*	Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, …	
	Confronto offerte con computo metrico estimativo iniziale per la verifica di congruità	*	 	
	Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa	*	 	
	Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione	*	 	

7-ELE	Gestione della costruzione e D.L.		 	
	Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori		Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti	
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	*	 	
7-ELE	Gestione della costruzione e D.L. (segue)		 	
	Acquisizione Costruttivi imprese e approvazione	*	 	
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro 	*	 	
	Eventuale redazione verbali 	*	 	
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	*	 	
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax	*	 	
				
8-ELE	Collaudi		 	
	Da definire	*	 	
	Redazione as-built	*	 	
	Relazione finale sulla consistenza dei lavori e verifica di rispondenza al progetto d'appalto	*	 	
	Raccolta e riordino documenti finali di collaudo elaborati dalle imprese	*	 	
	Esecuzione dei collaudi funzionali e prestazionali.	*	Compresa verifica dei parametri elettrici es. resistenza di terra, intervento protezioni, loro effettivo coordinamento, ecc.). 
NB.: da definire inizialmente se tale compito spetta al progettista od	
Impostazione scadenziario manutenzioni e controlli (con dettaglio scadenze e descrizione controlli da effettuare…) NB.: da definire inizialmente se tale compito spetta al progettista od all'installatore.all'installatore.
	
Per impianti speciali: verifica con enti preposti (preparazione documentazione, presentazione e verifica congiunta…)	
	
	 	