1.2.7.	Mansionario acustica
	Mansionario
ACUSTICA		Note/esempi	
1	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione		(per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni)	
	Elaborati grafici		 	
	Relazione tecnica sulla verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 05/12/1997		Questa relazione tecnica non è obbligatoria ma molti comuni la richiedono	
	Analisi elaborati progettuali architettonici		 	
	Definizione degli ambienti e dei locali costituenti il progetto		 	
	Analisi elementi strutturali ed elementi di partizione: valutare il potere fonoisolante Rw delle varie tipologie di partizione		 	
	Calcolo dei vari parametri e verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997		 	
	Stesura relazione tecnica di verifica teorica		 	
	Relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico - Legge Quadro n. 447/1995, art. 8 e D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 (se il progetto ricade in Regione Lombardia, altrimenti verificare l'eventuale presenza di leggi regionali)		Questa relazione è obbligatoria anche se molti comuni NON la richiedono 	
	Analisi elaborati progettuali architettonici		 	
	Analisi del P.R.G./P.G.T. e della Zonizzazione acustica comunale		 	
	Sopralluogo al fine di identificare la presenza di particolari sorgenti sonore o di eventuali ricettori sensibili 		 	
	Concordare con l'A.R.P.A. i punti e le modalità dei rilievi fonometrici da effettuare		Questo passaggio è contenuto nelle linee guida per l'applicazione della D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313.	
	Effettuare i rilievi fonometrici del clima acustico della zona allo "stato zero" (rilievi diurni e notturni)		 	
1	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)		(per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altre Autorizzazioni)	
	Redigere la relazione tecnica secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 (se progetto ricade in Regione Lombardia altrimenti verificare di volta in volta la presenza di leggi regionali)

				
2	Progetto Esecutivo		 	
	Verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 05/12/1997			
	Verificare che gli elementi di partizione (solai, partizioni interne, copertura, serramenti, ecc.) previsti a livello di progetto esecutivo abbiano caratteristiche acustiche almeno pari a quanto indicato nella relazione di verifica teorica dei requisiti acustici passivi		 	
	Qualora vi fossero incongruenze segnalare al progettista ed eventualmente riverificare il rispetto dei requisiti imposti dal D.P.C.M. 05/12/1997		 	

3	Gestione della costruzione e D.L.		 	
	Durante i lavori		 	
	Verificare la corretta posa in opera degli eventuali materiali fonoisolanti previsti (ponendo particolare attenzione ai "punti critici" quali materassini anticalpestio ed eventuali ponti acustici)		 	
	Verifica della corretta posa in opera dei serramenti (facendo particolare attenzione in presenza di tapparelle e cassonetti)		 	

	
			
4	Richiesta agibilità		 	
	Certificati di verifica in opera del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 05/12/1997		Questa relazione tecnica (contenenti i risultati di prove strumentali effettuate in loco) non è obbligatoria ma molti comuni hanno cominciato a richiederla	
	Concordare con il comune o con l'ARPA la quantità di elementi da collaudare per poter verificare l'intera struttura		La scelta degli elementi da collaudare sarebbe a discrezione del professionista, ma è sempre buona cosa concordare preventivamente il numero di misure con gli Enti coinvolti	
	Collaudo degli elementi in opera mediante apposita strumentazione (fonometri, macchina per il calpestio, sorgenti sonore omnidirezionale e direttiva)		 	
	Misura dei tempi di riverbero dei locali analizzati		 	
	Stesura di relazione tecnica e redazione certificati di collaudo ai sensi delle Norme UNI EN ISO 717			
*	Certificazione acustica dell'edificio - UNI 11367		Questa relazione tecnica attualmente non è obbligatoria ma, facendo capo ad un regolamento della Comunità Europea, verrà recepita e diventerà obbligatoria (ad. esempio in Calabria una Legge Regionale l'ha già resa obbligatoria	
	Concordare con il comune o con l'ARPA la quantità di elementi da collaudare per poter verificare l'intera struttura		La scelta degli elementi da collaudare sarebbe a discrezione del professionista, ma è sempre buona cosa concordare preventivamente il numero di misure con gli Enti coinvolti	
	Collaudo degli elementi in opera mediante apposita strumentazione (fonometri, macchina per il calpestio, sorgenti sonore omnidirezionale e direttiva)		 	
	Misura dei tempi di riverbero dei locali analizzati		 	
	Stesura di relazione tecnica		 	
	Assegnazione classificazione all'edificio collaudato